수 성 대 학 교

수성대학교 균열보수공사 시방서

수 성 대 학 교

공 사 명 : 수성대학교 균열 보수공사

공사위치 : 대구광역시 수성구 달구벌대로 528길 15 / 캠퍼스 내 안나관,신비관,리오바관

가. 공사기간 : 착공 후 15일 이내

나. 공사범위

구분	공사내용	비고
안나관	엘리베이터 기계실2개소 및 기계실 출입계단실	EV기계실(좌,우) 계단실
신비관	외부 5층 슬라브 단면보수,5층 내부 복도 천정	외부5층+내부5층
리오바관	어린이집 2층 계단실 벽체(원형계단실)	높이3M이상

다. 공사세부내용

1) 균열 크랙보수 및 지수작업

2) 균열 크랙보수 후 내부 마감 및 도장(무늬코트 포함)

3) 외부 슬라브 단면보수 및 도장작업

4) 본공사를 위한 가설공사 및 준공청소 전체 포함

3. 일반사항

가. 본 공사는 시방서의 기준에 따라 시공하여야 하며 본 시방서가 현장여건 및 작업과 상이할 경우 발주자의 의견에 따른다

나. 공사에 사용하는 자재는 신품이어야 하며 KS제품(친환경)을 우선 사용하여야 하며 표시품이없는 품종은 동등한 규격품을 사용한다

다. 공사에 사용하는 모든 자재는 시공 전 감독관의 사전검사를 받은 합격품만을 사용하며 부적합한 제품은 즉시 현장 외부로 반출하고 대처한다

라. 공사에 사용할 자재는 반입반출시 감독관의 사전협의 후 승인을 득하고 지정장소에 보관한다

마. 발주자의 필요에 따라 재료검사 및 시험을 지시할 수 있으며 이는 시공자가 부담하여야 한다

바. 공사에 필요한 전기,수도는 학교에서 1차측까지 제공하며 2차측까지 소요되는 가설작업은 시공자의 부담으로 견적에 포함한다

사. 현장의 공정관리 및 안전관리를 위한 현장대리인이 상주해야 하며 감독관의 지시에 따른 안전 시설물 등의 보완지시는 즉각 이행하여야 한다

아. 기타 일반적인 사항은 도장공사 표준시방서를 기준으로 한다

4. 도장공사

4-1. 도장공사

가. 공사범위

건물별(안나관,신비관,리오바관) 현장점검을 통해 보수 부위 확인 및 크랙+도장보수 범위 파악할 것

나. 시공방법

1) 내부,외부 크랙보수를 실시한 부분은 외부용 퍼티2회 작업 후 작업을 진행하여야 하며 그  외 크랙부분이나 면의 평활도를 위한 부분은 외부용 일반퍼티작업 후 2회 도장을 포함하고 매 공정이 끝난 후 감독관의 승인을 득한 후 후속공정을 진행

2) 도장 표면상태가 박리된 부분은 완전히 긁어낸 후 믹싱 처리

3) 먼지제거 및 부착물을 완전히 제거하여 박리된 부분과 벽면의 요철부분은 연마작업 및 필요에 따라서 세척작업을 감독관이 지시할 수 있으며 이에 대한 모든 비용을 포함하여 견적한다

4) 수성페인트 도장작업은 도장두께가 60μ(마이크론) 이상 되어야 한다

5) 도작작업의 도막두께가 불균일하거나 흘림자국 및 얼룩이 발생하였을 때는 추가 비용없이 재시공하여야 한다

6) 도작장업은 일정한 방향으로 균일하게 작업하여야 하며 완료된 도장표면의 색체는 전체적으로 이색이 발생하지 않고 동일하여야 한다

7) 습도가 높고 도장작업 여건에 부적합하다고 판단할 경우 감독관은 작업의 중지를 지시할수 있다

8) 작업공간을 청결히 관리하여야 하며 보양 및 청소비용을 견적에 포함하여야 한다

4-2. V(U)-CUTTING

가. 균열조사

균열상태, 폭, 길이 등을 충분히 점검하여 공정순서를 확인한다

나. 바탕정리

와이어브러쉬, 디스크센더 등으로 균열 주위를 청소한다

다. V커팅,U커팅

균열을 따라서 약10MM 폭으로 콘크리트를 V형으로 한 부분에 실링재,에폭시수지 및 폴리머 시멘트 모르타르를 충전해 균열을 보수한다

라. 청소 및 프라이머 도포

컷팅부위는 부착력을 좋게하기 위해 이물질이나 분진 등을 청소하고 에폭시 씰링재의 접착을 최대한 향상시키기 위한 프라이머본드를 혼합하여 골고루 섞은 후 도포한다

마. 씰링

에폭시 프라이머 도포 후 약 1-2시간 경화 후에 탄성 에폭시를 골고루 배합 후 V커팅 또는  U컷팅한 부위에 씰링하며 상도등 마감재 시공은 씰링재가 완전히 경화,양생된 후 아크릴 코팅재로 시공한다

5. 기타사항

가. 도료의 선정

- 본 공사에 사용할 도료는 한국공업규격품(ks 2급)으로 하며 규격품이 없는 품목과 제품의 선정은 지정사양

나. 도료의 확인

- 본 공사에 사용할 도료의 반입은 물품이 개봉되지 않은 상태에서 감독관의 검사를 받아야 하며 검사를 받지 않는 도료는 사용할 수 없다

다. 도료의 종류 및 색상

- 수성페인트 외부용 ksm5310-2급

- 수성페인트(친환경페인트) 내부용 ksm5320-2급

라. 도료의 선택

- 본 공사시공에 한국공업규격을 획득한 제조사 중 고려화학/삼화페인트/대한페인트/건설화  학/벽산페인트 제품 중 선택하여 사용 한다

마. 제품의 품질보증서 제출

- 본 공사의 시공자는 위 사항의 제조회사 도료를 사용함에 있어 사용도료의 제조회사 법인의 품질보증서(시험성적서) ks공장허가증을 도료 반입 시 제출한다.

6. 특기사항

가. 가설공사/현장정리비(보양,집진기등)/준공청소를 포함하여 견적할 것

나. 건물별 균열보수의 형태나 작업동선,작업방법 및 마감처리가 상이하므로 사전에 현장 방문 할 것

다. 공고기간 내 현장을 필히 확인 후 견적 제출할 것

- 시설지원팀에 방문하여 담당자 미팅 및 현장확인, 작업 물량실측 후 견적 제출

- 작업수량은 현장 실측 후 확인하여 견적제출 하여야하며 이로 인한 오류로 물량변경은 없음