수 성 대 학 교

수성대학교 피부건강관리과 메디컬스파전문가과정

LINC+육성사업 현장미러형 실습실 환경개선공사(건축) 시방서

2020. 12.

수 성 대 학 교

공사명: 수성대학교 피부건강관리과 메디컬스파전문가과정 LINC+육성사업 현장미러형 실습실 환경개선공사 건축공사

공사개요

가. 공사위치: 대구광역시 수성구 달구벌대로 528길 15(만촌동) 수성대학교 캠퍼스 내

나. 건물개요: 신비관 (철근콘크리트조 지하2층 / 지상5층)

다. 공사기간: 착공 후 30일 이내 (학사일정 동계방학 2020.12.22.후 착공 일정 협의)

라. 공사범위: 신비관 210호(약170㎡) / 건축공사 및 냉난방기 철거 및 재설치 포함

건축공사(첨부 공사도면 및 시방서 참조)

건축표준시방서를 기준으로 하며, 각 공정별 작업이 완료 후 필히 감독원의 승인을 득한 후 추후 공정에 작업을 실시하도록 한다.

4. 유의사항

가. 시공사는 시공시 공사 종사자에 대한 안전교육을 실시하고, 공사전반에 대한 안전관리, 소방관리 및 방재관리를 철저히 하여야 하며, 민·형사상의 문제점 발생 시 책임을 진다.

나. 시공사는 공사착수 전에 설계도서를 검토하여 시공에 불합리하거나 현장상황과 상이한 부분이 있을 경우에는 즉시 발주처에게 서면으로 보고하여 도면이 보완될 수 있도록 조치한다. 또한, 물량의 과다산출, 누락,오기 등 내용이 불분명한 부분이 있을 시 발주처에게 보고하고 발주처의 지시에 따라 시공하며, 시공 및 구조상 필요한 부분은 시공 상세도면을 작성하여 발주처의 승인을 받아 시행한다.

다. 시공사는 설계변경 및 시공변경 등에 대한 공사내용을 정확히 기록, 유지하여 준공 시 준공 설계도서(설계 건축사 도장날인 도면)에 명확히 표기하여 제출하여야 한다.

라. 공사현장에서 발생되는 부산물 및 일체의 폐기물은 관계법을 준수하여 처리되도록 조치하여야 한다.

마. 본 공사에 투입되는 모든 자재는 사전에 견본품과 자재승인요청서를 제출하여 발주처의 승인을 받은 후 사용하여야 하며 공사진행에 따른 모든 대 관청업무 및 인허가사항은 시공사가 발주처를 대행함.

바. 공사구간 내 접근 가능한 엘리베이터가 없으므로 견적 시 현장 조사를 통해 반드시 확인할 것

사. 실습실 위치 주변 교수연구실이 집중되어 있으므로 분진 및 소음에 대한 보양 및 공사 구획관련 가설계획을 제출, 승인 후 공사 진행 하여야 한다.

아. 내부 인테리어필름지 마감,롤 블라인드 등 신규설치 자재는 방염처리 된 제품을 사용하여야 한다.

자. 본공사에 실내 냉난방기 철거 및 위치이동 재설치(2대)가 포함되어 있으며 해당층 1차 측까지 냉매배관 라인 확인 및 제반여건을 확인 하여야 하며 시운전을 포함하여 작동점검 하여야 함.

차. 분리발주 되는 공종(전기공사,통신공사등)에 대한 1차적인 마감의 책임은 해당공종에 있으며 2차 최종마감은 건축공사에서 한다.

카. 준공청소는 횟수에 제한을 두지 않으며, 발주처의 승인을 득할 경우 완료하는 것으로 하며 또한 작업 부산물의 비산 될 경우 해당 공사범위 외 기타층에 대한 부분도 포함한다.

타. 분리발주(전기,통신)와 건축공사가 접하는 부분은 건축시공사가 1차적인 마감 관리의 책임을 가진다.

파. 모듈(색상,크기 등)이 변경되는 유지보수용 자재는 상호협의 하여 일정량의 수량을 준공시 제공함.

하. 현재 배치된 기자재는 지정장소로 이동 후에 공사를 진행하며 공사 완료 후 지정위치에 재배치하는 것을 포함하여 이를 견적에 포함하여야 한다.